제 안 요 청 서

2025. 12. 16.

Ⅰ. 용역 개요

일반사항

○ 용 역 명 : (재)공공상생연대기금 사무실 실내 리모델링 공사

○ 용역기간 : 계약체결일로부터 ~ 2026. 2. 12.(목)까지

○ 예정금액 : 250,000,000원(부가가치세 포함)

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 입찰참가자격

- 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조』에 의한 일반경쟁 입찰 참가자격을 구비한 업체로서 아래의 각 항 모두를 충족시키는 업체

· 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중에서 ‘실내건축공사업’ 면허를 등록한 업체

· 입찰공고일 기준 사업개시일이 5년 이상인 업체

· 사업장(본점 또는 지점)이 서울에 소재한 업체

· 공고일 기준 최근 3년 이내 사무실 인테리어 공사금액이 단일건 기준 2억원(부가세 포함) 이상의 공사실적을 보유하고 있는 업체

· 제안서 제출 시 재단의 선정방식과 평가방식에 이의가 없음을 확약한 업체

* 공동도급(분담이행) 가능

2. 용역 개요

○ 이전사무실 실내 리모델링 공사

- 이전 장소 : 서울시 중구 무교로 32, 효령빌딩 15층 전층호

- 공사 면적 : 전용면적 381.26㎡ + 테라스 54평

3. 용역 목표

○ 재단의 목적사업을 수행하기 위한 최적의 환경 조성

- 쾌적하고 효율적인 공간구성으로 구성원의 정보 공유 및 업무활용도 배가

Ⅱ. 과업수행 지침

1. 과업수행 내용

■ 추진방향

○ 사무실, 대회의실, 중회의실, 소회의실, 이사장실, 휴게실, 탕비실, 화장실, 접견공간, 창고, 서고 등이 공간별 기능에 맞게 리모델링 되어야 함

○ 공간별 특성에 따라 방음이 잘 되도록 설계

○ 조명을 led로 교체하고, 현재의 천장을 개선할 수 있는 실내 인테리어 설계 및 시공 필요(예산 확인)

○ 남녀 화장실을 별도 분리하고, 사용 공간을 확대(예산 확인)

○ 설계도면과는 별도로 입체도면과 영상을 제작하여 이해도를 높일 것

○ 옥상 테라스 공간은 조명 설치, 외벽 일부(오염 부위) 페인트 공사

○ 관련 법령에 의한 인·허가 등이 포함

■ 추진내용

○ 사무실, 회의실, 이사장실, 휴게실, 탕비실, 화장실, 접견공간, 창고, 서고를 포함하여 15층 전체의 인테리어, 전기, 통신, 보안, 소방공사 등 사업에 필요한 설계와 시설공사 업무 일체

- 시설별 주요 기능이 포함되어야 하며, 현장을 분석하여 효율적이고 독창적인 공간 구성을 제시

- 재단 이미지에 부합한 인테리어 설계 및 시공

- 가구 등의 효율적인 배치로 공간 활용 극대화

· 추가 공간 설계 및 조성에 필요한 집기 등 추가 구입

- 최적의 동선설계로 직원 및 방문자에 편의 제공

- 최상의 디자인 및 마감재료 등의 조화로운 색상 구성 제안

- 공사일정 및 공간 활용 설계에 따라 일부 변경될 수 있음

○ 산업안전보건법 제73조에 의한 산업재해 예방지도비용은 예정금액에 포함(낙찰자의 비용으로 지급)

○ 산업안전보건 관리비 등은 예정금액에 포함되어 있음을 인지해야 함

○ 본 과업과 관련하여 추가로 발생할 수 있는 사항에 대한 업무

○ 위 내용은 사업자 선정 후, 재단과의 협의를 통해 수정 및 보완될 수 있음

※ 공사 내용에 따라 공사 가능 여부와 방법(소음, 먼지 등)은 관리사무소에 사전 확인 필요 (02-753-0047)

■ 추진일정

○ 서류 제출 마감(PT 자료 포함) : 2025년 12월 22일(월) 15:00까지

(점심시간 11:30~13:00 제외)

○ 현장설명회 : 2025년 12월 16일(화) 10:00

○ 입찰 심사(PT) : 2025년 12월 26일(금) 10:00

○ 우선협상자 선정 : 2025년 12월 26일(금)

○ 계약 체결 : 2025년 12월 30일(화)

○ 공사 시작 : 2025년 12월 31일(수)

○ 공사 완료 : 2026년 2월 12일(목)

○ 성과품 제출 : 2026년 2월 12일(목)

(준공도서, 사용 매뉴얼, 각종 도면 CAD 파일 및 PDF)

2. 제안 요청 사항

■ 공통사항

① 자연광이 잘 드는 공간감을 살려, 시각적으로 넓고 정돈된 인상을 주되 업무 집중도를 해치지 않는 밝고 시원한 인테리어

② 건물의 특성과 장점을 살리고 불용공간을 줄이는 방안 추진

<현재 건물의 특성>

- 고전적이고 무거운 분위기이므로 현대적이고 깔끔한 스타일로 -

가. 현재의 구조에서 전면적인 가벽 철거가 효율적일지, 일부는 살리고 부분적으로 시공을 할지 검토 필요

나. 천장고를 높이고 조명을 설치할지, 천장고를 그대로 두고 조명만 교체할지 예산과 결부하여 검토 필요

다. 유리창 외벽 커튼 : 내추럴 블라인드(회의실, 이사장실은 색상 별도)

라. 바닥공사 : 밝은 계열 데코타일로 회의실은 색상을 다르게, 이사장실은 강마루

③ 불필요한 벽체를 최소화하고, 높이가 낮고 볼륨감이 적은 디자인의 가구를 택함으로써 통로 폭을 여유 있게 설계

④ 소방 등 관련 법규 준수

⑤ 공사 진행 시 작업 전반의 안전관리 준수 및 작업자들에 대한 안전관리 준수

⑥ 전기, 통신, 기계, 소방, 냉난방기 일체 포함

⑦ 필요시 집기 일부 구매 포함(재단과 협의)

⑧ 인테리어, 전기 등 공사 분야별로 설계도서(설계설명서, 설계도) 작성

⑨ 사무실 조명은 부분별 on/off로 설치하되, 사무실 입구에는 전체조명 on/off와 메인 s/w 설치

⑩ 사무실과 회의실 조명은 밝고 내구성 있는 조명으로, 휴게실과 접견공간은 공간 특성에 맞게 인테리어 조명 배치

⑪ 설계도서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상, 기타 당연히 필요한 사항, 또는 법령에 규제되는 사항은 재단의 요청에 따라 보완 시공

⑫ 공사 시공 후 유해성 물질 제거 등 청소 실시

※ 유해물질 잔존 여부 검사

■ 내부 인테리어 공사 부문

○ 공간 평면도

○ 공간별 요청사항

공간	요청사항
출입구 복도 및 출입문 (엘리베이터 전면)	가. 엘리베이터에서 내렸을 때, 전면 벽채에 사인월 조성 설치 - 출연기관 게시판 및 재단명, 조명 설치 나. 출입문 자동문 설치
대회의실 (통합회의실의 2/3 공간)	가. 회장실과 회의실을 통합하여 20~30명 사용공간 나. 벽체는 화이트톤, 최근 벽면 자재 검토 다. 전면에 100인치 TV 모니터 설치 (전면 조명 별도 설치 ON/OFF) - 회의실 조명은 2단 나누고 디머(dimmer) 스위치 설치 - 대형 모니터는 빔프로젝터 대용이므로 관련 장치 장비 참고 라. 화이트보드, 포토월, 전시월, 포디움, 음향시설 설치 마. 회의 진행용 테이블 및 의자 배치 등
중회의실 (통합회의실의 1/3 공간)	가. 회장실과 회의실을 통합하여 10~15명 사용공간 나. 전면에 85인치 이상 모니터 설치 (전면 조명 별도) 다. 회의실 조명 1단(디머 스위치) 설치
통합회의실	가. 대회의실과 중회의실 격벽 오픈하여 통합회의실로 사용 (최대 50명) 나. 분리용 격벽은 편리성과 방음 성능 고려하여 무빙월 등 선택 ※ 격벽 분리에 대한 편리성 및 방음 성능 정도에 따라 진행하지 않을 수 있음
소회의실	가. 최소 6인 내외 소회의실 나. 화이트보드 설치 다. 테이블 및 의자 배치 등
사무공간	가. 최소 10인 수용 가능 나. 사무용에 적합한 조명, 커튼, 공간 배치 다. 직원간 적절한 이격 거리 공간확보 라. 집행위원장 별도 룸 또는 파티션 설치 마. 사무실 내부에 회의용 공간 구성 바. 사무실 외벽 공간에 붙박이 책장 설치
이사장실	가. 기존 이사장실(종로구 자하문로) 평수 규모로 리모델링 나. 업무공간과 접견공간 확보
접견공간	가. 회의실 및 이사장실 주변에 접견공간 마련(7~8인용) 나. 재단 방문객 맞이 공용공간으로 활용 다. 가구, 조명 등 특성에 맞는 공간 구성 라. 맞이 및 간단한 회의 가능한 카페 느낌 구성
탕비실	가. 현재의 탕비실 공간 활용하되 깨끗하게 리모델링 나. 정수기, 냉장고 등 수납공간 재정비
화장실	가. 축소된 현재의 화장실 확대 복원(13층, 14층 화장실 참조) 나. 성별 화장실 입구 분리 - 여자 화장실 : 세면대1, 화장실3, 비품 공간1 - 남자 화장실 : 세면대1, 화장실2, 소변기2
창고	가. 소모품 및 비품, 각종 물품 등 보관·수납
휴게실	가. 성별 구분 휴게실 나. 쾌적한 환경으로 재충전을 위한 휴식공간
서고	가. 사무실 공간에 서고 설치(현재 금고 공간 혹은 그 외 장소) 나. 재단 서적, 각종 자료 등 보관
바닥 및 천장 등	가. 전체 인테리어와 조화가 되는 마감재 및 LED 조명 나. 차광시설(블라인드) 설치
기타	가. 전기공사 : 용도에 맞는 제품 및 절전형 제품 사용 나. 소방공사 : 소방법 준수, 안전하고 철저한 소방시설 다. 통신공사 : 각 사무실, 회의실 인터넷 선 포설

○ 적용법령 및 규정

- 한국공업규격(KS) 및 국제표준규격(ISO, IEEE, ANSI, ETSI)

- 소방설비법, 전기공사법 및 동 시행령, 동 시행규칙

- 정보통신공사법 및 동 시행령, 동 시행규칙

- 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

- 기타 본 사업과 관련된 법령 및 규정

Ⅲ. 제안요청 내용

○ 제안사는 재단의 제안내용 및 위 ‘Ⅱ. 과업수행 지침’을 정확히 파악하여 본 사업의 목적, 범위 등을 명확하게 구체적으로 기술하여 제안

○ 구체적인 제안내용의 기술은 아래의 ‘제안서 목차’에 따라야 함

제안서 목차		주요 기술 내용
1	제안사 소개	1.1. 제안사 정보 - 연혁, 재무 상태, 조직 및 인력현황 등 포함 1.2. 최근 3년 이내 유관 분야 사업 실적 1.3. 제안사의 특징 및 장점
2	용역추진 계획	2.1. 과업 추진범위 2.2. 과업 추진 내용별 구체적 실행방안 2.3. 과업 추진전략 2.4. 과업 추진일정 2.5. 인력투입 계획 2.6. 용역수행 중 예상 위험요인 및 대책
3	용역 결과물	3.1. 최종 산출물 (제안서 제출 항목 참고)

○ 제안서는 제안요청서에 상세히 기술되지 않았더라도 본 용역을 추진하는데 필수적으로 판단되는 사항은 모두 사업 범위 내에 포함된 것으로 이해하고 제안하여야 함

○ 제안서에는 아래의 항목을 반드시 포함

- 사무실 배치도면, 가구 배치도

- 평면도 및 세부 상세도

- 입면도

- 견적서(세부산출내역 포함, 견적금액은 최종 입찰금액과 같아야 함)

- 사무실 인테리어 방안(시안 첨부)

- 재료 및 마감표 제출(재료명 및 색채 표시)

Ⅳ. 제안서 평가기준 및 안내사항

1. 평가기준

○ 제안서 평가점수는 기술평가 80점, 가격평가 20점, 총 100점으로 함

* 사전에 현장설명회에 참가한 업체는 가점 부여

○ 재단이 마련한 제안서 평가기준 및 배점표에 따라 평가위원회에서 평가를 실시하며, 평가위원 명단은 공개하지 않음

○ 평가결과를 비공개로 하며, 평가결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없음

○ 평가항목 및 배점

구분	평가항목			배점
	항목		내용
기술 평가 (80) (A)	정성 (70)	사업 목적 적합성	・제안 내용의 사업 목적 적합 여부	30
		공사시공능력	・기술인력 보유상태, 재정상태 양호 여부 ・공간 구축 및 인테리어 시공을 위한 적합한 기법 제안 여부 ・전기, 소방, 공조설비 구축방안 적정성 ・사업 추진 일정 및 계획 수립 적정성	30
		사업관리능력	・수행 인력구성의 적합성 및 전문성 ・추진일정표, 사후관리방안 등	10
	정량 (10)	용역수행 실적*	・최근 3년 이내 유사분야 용역수행 실적	10
가격평가(20)** (B)			・제안가격의 적정성	20
합계(A+B)				100

* 실적평가(정량) 방법

※ 최근 3년 이내 유사사업 실적(건당 1억원 이상)

① 10건 이상 : 10점   ② 7건~9건 : 8점   ③ 4건~6건 : 6점

④ 3건 이하 : 4점

기 종료된 사업실적만 평가함

객관적인 증빙(계약서, 실적이행증명서, 전자세금계산서 등) 서류가 있는 실적만 인정 가능

** 가격평가 방법

※ 배점 산식 [Max(①, ②)]

① 가격능력평가 배점한도(20점) X [eqn: {최저입찰가격*} over {당해입찰가격**}]

* 제안 입찰가격 중 최저금액

** 해당 입찰 참여 기관 제안금액

② 17점

2. 제안서 작성 시 주의사항

○ 제안서 규격

- A4 크기(210㎜ × 297㎜)로 작성

- 각 면(쪽)마다 일련번호를 기재하여 표지와 함께 제출

- 제안서는 30페이지 이내로 작성

○ 제안서 작성시 유의사항

- 제안서는 제안서 작성순서에 의거하여 작성하며, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별지로 작성

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하고 가능한 계량화하며, 제안서에 명기된 내용 중 해석에 이견이 있을 경우 재단의 해석을 우선

- 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 때에는 선정 무효

- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 가능

- 제안자는 입찰공고, 제안요청서, 기술평가표 등 필요한 모든 사항을 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 제안자에 귀속

- 제안서의 요청내용은 최소한의 요구이므로 제안의 내용이 이를 충족하지 못 할 경우에는 평가에서 제외

3. 제안서의 효력

○ 제안서의 제시내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선됨

○ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 재단의 의견을 우선 적용함

○ 제출된 제안서의 내용은 재단의 동의 없이 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

○ 재단 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지님

4. 제안서 제출 방법

○ 제안서 5부* 및 이동식 저장장치(USB) 1개를 지정한 일시까지 재단 사무국에 제출(우편 및 이메일 접수 불가)

* 제안서류 일체는 이동식 저장장치(USB)에 PDF 파일 형식으로도 제출

○ 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 재단이 접수한 제안서는 수정 또는 변경하거나 철회할 수 없음. 단, 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 재단이 인정할 경우에는 수정 또는 변경할 수 있음

○ 제안업체가 제출할 각 제안서는 법인인감 또는 사용인감으로 날인되어야 하며, 가격제안서는 간인 날인되어야 함

5. 비밀 유지 및 보안 유지 의무

○ 제안서 작성과정에서부터 과제수행 중 재단에서 받은 제반 정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 아니되며, 재단에서 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환해야 함

○ 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨

○ 입찰업체 및 선정된 용역업체는 입찰과정 중에 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보의 비밀을 유지하여야 함

○ 용역업체는 본 용역과 관련된 제반사항에 대한 보안 유지를 위하여 관리책임자를 선임하고 참여 인력에 대한 보안교육, 보안대상의 관리 등을 철저히 하여야 하며, 관리 소홀로 인한 자료 유출 시 그에 대한 책임은 제안자에 있음

6. 소유권

○ 용역수행업체는 본 용역을 수행하면서 발생하는 저작권, 사용권, 초상권 등의 문제에 대해 책임져야 하며, 이와 관련 재단은 어떠한 책임도 지지 아니함

○ 용역의 결과물로 산출된 과업 결과물에 대한 지적재산권 등 일체의 권리는 재단에 귀속함

7. 용역수행업체의 의무

○ 용역수행업체는 계약일로부터 7일 이내에 착수계획(세부 추진계획, 추진일정, 투입인력을 포함한 수행체계 등을 구체적으로 기술)을 작성하여 재단으로 제출

○ 용역수행업체는 용역수행 중 사정에 의하여 추진과정의 일부 변경이 필요할 경우 사전에 재단과 반드시 협의하여야 함

○ 용역수행업체는 용역수행 시 모든 과업을 해당 분야 전문가가 수행하도록 하여야 하며, 재단은 수행 인력이 과업수행에 부적당하다고 판단될 경우에는 즉시 적절한 인력으로 교체할 것을 요구할 수 있음

○ 계획의 불완전 및 내용의 하자로 인하여 재단에 피해가 있을 때 또는 용역수행업체로서 의무와 필요한 조치를 이행하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 용역수행업체에 있음

8. 제안서 제출 및 입찰 등록

○ 제출 기한 : 2025. 12. 22.(월) 15:00(방문 접수)

* 점심시간 11:30~13:00 제외

○ 제출 서류(필수)

번호	제출서류	부수	비고
1	입찰 참가신청서	1부	서식 1
2	현장설명참가원	1부	서식 2
3	공사내역서	1부	출력물 및 파일
4	가격제안서(밀봉)	1부	서식 3
5	사업자등록증	1부	원본대조필
6	법인등기부등본(말소사항 포함)	1부	입찰공고일 이후 발급 개인사업자 : 주민등록등본
7	법인인감증명서	1부	입찰공고일 이후 발급 개인사업자 : 개인인감증명서
8	사용인감계	1부	자유양식
9	최근 3년 이내 주요사업 실적증명서	1부	서식 6
10	국세 및 지방세 완납증명서	1부	입찰공고일 이후 발급
11	실내건축공사업 면허증	1부	원본대조필
12	신용평가등급 확인서	1부
13	확약서 및 청렴계약이행서약서	1부	서식 9
14	입찰보증금		입찰금액의 5/100 이상의 이행보증보험증권
15	대리인 재직증명서, 위임장	1부	자유양식

○ 제출 장소 : 서울시 종로구 자하문로 106, 아카이브빌딩 6층

(재)공공상생연대기금 사업팀(070-4272-0019, 070-4272-0014)

<첨부> 관련 서식

[서식 1] 입찰참가신청서

[서식 2] 현장설명참가원

[서식 3] 가격제안서

[서식 4] 일반 현황 및 연혁

[서식 5] 최근 3년간 경영현황

[서식 6] 최근 3년간 사업실적

[서식 7] 사업수행 조직도

[서식 8] 참여인력 현황

[서식 9] 확약서 및 청렴계약이행서약서

[서식 1] 입찰참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서
입 찰 건 명	(재)공공상생연대기금 사무실 실내 리모델링 공사
상호 또는 법인명
사업자등록번호
법인등록번호
대 표 자
전 화 번 호
이 메 일
주 소
당사(본인)는 귀 재단이 공고한 입찰에 참가하고자 귀 재단에서 정한 입찰공고 및 기타사항을 모두 승낙하고 별첨서류*를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. *별첨서류 : 1. 공사내역서 및 가격제안서(밀봉) 각 1부 2. 사업자등록증 사본 1부(원본대조필) 3. 법인등기부등본 1부(말소사항 포함) 4. 법인인감증명서 1부 5. 사용인감계 1부 6. 국세 및 지방세 완납증명서 1부 7. 실내건축공사업 면허증 사본 1부(원본대조필) 8. 실적증명서 1부 9. 신용평가등급 확인서 1부 10. 확약서 및 청렴계약이행서약서 각 1부 11. 입찰보증금 : 입찰가격의 5/100 이상의 이행보증보험증권 12. 위임장(대리인의 경우) 1부 2025년 월 일 입찰자 : 법인명(대표자) (법인인감 또는 사용인감) 재단법인 공공상생연대기금 이사장 귀중

[서식 2] 현장설명참가원

현 장 설 명 참 가 원
1. 입 찰 건 명	(재)공공상생연대기금 사무실 실내 리모델링 공사
2. 현장설명 일시	2025. 12. 16.(화) 10:00 ~
3. 현장설명 장소	서울시 중구 무교로 32, 효령빌딩 15층
4. 입찰서 마감	2025. 12. 22.(월) 15:00
5. 참 가 업 체
- 업 체 명
- 대 표 자
- 참 가 자
* 대표자가 아닌 대리인이 참석할 경우 위임장 제출 상기 본인은 본 현장설명에 참여함에 있어 첨부된 모든 조건 등을 전체 숙지하고 입찰에 참여할 것을 약속하며 서명합니다. 2025년 월 일 참가자 : (서명) 재단법인 공공상생연대기금 이사장 귀중

[서식 3] 가격제안서

가 격 제 안 서

입찰건명

(재)공공상생연대기금 사무실 실내 리모델링 공사

제안업체

공사기간

제안금액

일금                    원 (￦                 ) : 부가세 포함

구 분	금 액	비 고
① 재 료 비
② 노 무 비
③ 경 비
④ 일 반 관 리 비
⑤ 이 윤
⑥ 부 가 세
⑦ 합 계
⑧ 제 안 금 액

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

붙임 : 세부산출내역서

2025년     월     일

입찰자 : 법인명(대표자)   (법인인감 또는 사용인감)

재단법인 공공상생연대기금 이사장 귀중

※ 가격제안서의 해당 항목에 대한 세부산출내역서를 상세히 작성하여 제출

[서식 4] 일반 현황 및 연혁

일반 현황 및 연혁
상 호 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

※ 공동수급업체는 모두 양식에 맞추어 제출할 것

※ 연혁은 최근년도부터 순차적으로 기입

[서식 5] 최근 3년간 경영현황

최근 3년간 경영현황
구 분	2022년	2023년	2024년	비고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출액
8. 자기자본비율 (자기자본/총자본)
9. 유동비율 (유동자산/유동부채)

※ 신용평가등급 확인서를 제출한 경우 제출 불필요

※ 2024년도 결산 공고된 대차대조표 및 손익계산서 등 회계사 또는 회계법인이 발행한 증명서류 첨부

[서식 6] 최근 3년간 사업실적

(단위 : 천원)

사 업 실 적 증 명 서(최근 3년)
사업명	사업기간	계약금액	발주처	비고

※ 현재 수행중인 사업도 포함하여 최근 연도순으로 기재

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며, 비고란에 원도급 회사를 기재

※ 공동도급계약의 경우, 계약금액란에 제안사의 지분만 기재

※ 실적을 확인할 수 있는 이행실적확인서, 실적증명서, 계약서 등의 증거서류 제출

[서식 7] 사업수행 조직도

					총괄책임자
부문			부문						부문					부문

※ 부문별 책임자 명시

[서식 8] 참여인력 현황

참여인력 현황 총괄표

(2025년  12월 기준)

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

※ 본 사업에 투입할 전체 인력에 대하여 기재(채용 예정인력 포함)

[서식 9] 확약서 및 청렴계약이행서약서

확 약 서

본인은 『(재)공공상생연대기금 사무실 실내 리모델링 공사』 입찰에 참가함에 있어 아래 사항을 준수할 것이며, 만일 위반 사실이 있을 시에는 입찰자격 상실을 포함한 귀 재단의 여하한 조치에 대하여 절대 이의를 제기하지 않겠습니다.

1. 본 입찰과 관련하여 취득한 정보는 제안의 목적 외 용도로 사용하지 않겠으며, 제3자에게 누설, 공포하지 않겠습니다.

2. 본 입찰과 관련하여 위법 부당한 청탁, 불공정 행위 등을 절대 하지 않겠습니다.

3. 본 입찰과 관련한 심사평가 결과 및 제반결정에 아무런 이의를 제기하지 않고 응낙할 것임을 확약합니다.

2025년     월     일

대표자 :                  (인)

※ 첨부 : 청렴계약이행서약서

재단법인 공공상생연대기금 이사장 귀중

청렴계약이행서약서

당사는 『(재)공공상생연대기금 사무실 실내 리모델링 공사』입찰에 참여함에 있어 다음과 같이 청렴계약이행서약서를 제출합니다.

1. 담합 등 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

2. 임직원에게 직·간접적으로 금품 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 사회통념상 유력인사로 인정되는 사람을 통하여 알선·청탁을 하지 않겠습니다.

위 청렴계약이행 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약 내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하겠습니다.

이를 위반하였을 때에는 (재)공공상생연대기금이 시행하는 입찰 및 계약 등에 참가제한, 계약취소 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 정한 불공정행위에 대한 고발 등의 조치도 감수하며, 당사가 (재)공공상생연대기금을 상대로 손해배상청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2025년     월     일

상  호 :

대표자 :                  (인)

재단법인 공공상생연대기금 이사장 귀중